2024년 회계연도

결산기준 특수공시

양  주  시

◈ 특수공시 대상사업 목록 ◈

연번	부서명	사업명	페이지
1	회계과	양주1동 복합청사 이전 건립	3
2	기업지원과	경기양주 테크노밸리 도시첨단 산업단지 조성사업	5
3	기업지원과	양주 은남일반산업단지 조성사업	7
4	청년체육과	양주시 장애인형 국민체육센터 건립	9
5	건설과	시도30호선(방성-산북간)도로확포장공사	11
6	건설과	선암리 도시계획도로(중로2-4호선) 확장공사	13
7	건설과	회천(서희아파트 앞) 도시계획도로(소로3-동2호선외 2) 개설사업	15
8	청소행정과	양주시 생활자원회수센터 설치사업	17
9	도시재생과	경기 꿈틀 생활 SOC 복합화 사업	19

양주1동 복합청사 이전 건립

노후화된 청사 및 주차장 부족 등에 따른 이용 불편을 해소하고 증가하는 행정수요에 능동적으로 대응하고자 복합청사로 이전 건립

▣ 사업개요

○ 기간 : 2021. ~ 2025.

○ 위치 : 남방동 589-2번지

○ 규모 : 연면적 6,946.09㎡, 지하1층 ~ 지상4층

○ 사업비 : 29,600백만원

사업비 (백만원)	재원별	총사업비	기투자	2024 예산액	향후소요
	합계	29,600	15,000	3,595	11,005
	국비	-	-	-	-
	도비	720	-	360	360
	특교세	800	-	800	-
	특조금	1,000	1,000	-	-
	시비	27,080	14,000	2,435	10,645

▣ 추진상황 및 향후계획

○ 2021. 06. : 지방재정투자사업 심사 완료

○ 2022. 04. : 설계 제안공모 당선작 선정 및 계약 체결

○ 2023. 06. : 기본 및 실시설계 용역 준공

○ 2023. 10. : 공사 착공

○ 2025.    :  공사 준공

▣ 사업효과

○ 읍면동 청사정비계획에 따른 청사신축을 체계적으로 추진하여 민원 편의 및 근무환경 개선

▣ 관련사진

▣ 담당부서 : 회계과 청사관리팀 이상용 (☏ 031-8082-5431)

경기양주 테크노밸리 도시첨단 산업단지 조성사업

신성장 인프라 구축 및 고급인력 유인을 통한 지식산업 기반 구축

▣ 사업개요

○ 기간 : 2019. ~ 2026.

○ 위치 : 양주시 마전동 258-1번지 일원

○ 규모 : 도시첨단산업단지 조성 A=218,105㎡

○ 사업비 : 149,094백만원

사업비 (백만원)	재원별	총사업비	기투자	2024 예산액	향후소요
	합계	149,094	18,565	17,765	36,330
	국비	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-
	시비	55,165	27,400	6,325	21,440
	기타*	93,929	67,599	11,440	14,890

*GH(경기주택도시공사) 투입 금액

▣ 추진상황 및 향후계획

○ 2017. 11. : 경기북부2차 테크노밸리 후보지 선정 (양주테크노밸리)

○ 2019. 03. : 타당성조사 완료 (한국지방행정연구원 지방투자사업관리센터)

○ 2019. 10. : 지방재정 중앙투자심사 통과 (행정안전부)

○ 2019. 12. : 산업정책심의 및 지정계획 고시 (국토교통부, 경기도)

○ 2020. 12. : GB해제 중앙도시계획위원회 심의 조건부의결(국토교통부)

○ 2021. 07. : GB해제 결정 고시 [경기도고시 제2021-102호(‘21.07.02.)]

○ 2021. 12. : 산업단지계획 승인 고시 [경기도고시 제2021-5218호(‘21.12.27.)]

○ 2022. 08. : 보상계획 열람

○ 2022. 11. : 보상협의회, 손실보상협의 개시

○ 2023. 03. : 공사 착공

○ 2023. 04. : 산업단지계획 변경승인고시 [경기도고시 제2023-110호(‘23.04.12.)]

○ 2023. 10. : 혁신거점 조성 전략 및 실행방안 수립용역 착수

○ 2023. 11. : 지방토지수용위원회 재결 ※ 2023.12.월 공탁금 지급 및 권원확보

○ 2023. 12. : 착공식 (12/5) [경기도지사, 양주시장, 경기주택도시공사장 등]

○ 2023. 12. : 보상금 공탁 및 수용개시(12/28)

○ 2025. 02. : 산단계획 변경 승인 고시 [경기도 고시 제2025-103호]

○ 2025. 05. : 관리기본계획 승인 고시 [경기도 고시 제2025-196호]

○ 2026. 下. : 기반시설(관로공 등) 완료

○ 2026. 下. : 공사 준공 및 정산

▣ 사업효과

○ 양주시의 신성장 인프라 구축 및 고급인력 유인을 통한 지식산업 기반 구축

▣ 관련사진

▣ 담당부서 : 기업지원과 산단조성관리팀 여종훈 (☏ 031-8082-6021)

양주 은남일반산업단지 조성사업

고부가가치 무공해산업 기업 유치로 경쟁력 있는 도시성장 기반 마련

▣ 사업개요

○ 기간 : 2016. ~ 2027.

○ 위치 : 양주시 은현면 도하리 산82번지 일원

○ 규모 : 일반산업단지 조성 A=992,361㎡

○ 사업비 : 460,331백만원

사업비 (백만원)	재원별	총사업비	기투자	2024 예산액	향후소요
	합계	460,331	278,531	20,693	161,107
	국비	23,953	22,450	-	1,503
	도비	5,199	1,917	3,282	-
	시비	134,447	74,720	5,459	54,268
	기타*	296,732	179,444	11,952	105,336

*GH(경기주택도시공사) 투입 금액

▣ 추진상황 및 향후계획

○ 2010. 11. : 산업단지 공급물량 확보(1,167,000㎡) (국토교통부)

○ 2016. 11. : 은남산단 지정 고시(687,206㎡ ≒ 약21만평)

○ 2019. 10. : 주한미군 공여구역 발전종합계획 반영

○ 2020. 09. : 20년 1차 지방재정 중앙투자사업 수시심사 조건부 통과

○ 2020. 12. : 국토교통부 2021년 산업단지 지정계획 조정회의 조건부반영

○ 2021. 01. : 군사기지 및 군사시설보호구역 해제 고시(은남 992,000㎡)

○ 2021. 03. : 경기주택도시공사 공동시행 기본협약 체결

○ 2021. 06. : 산업단지계획 변경 승인 고시(경기도 고시 제2021-5097호)

○ 2021. 07. : 은남 일반산업단지 내 농업진흥구역 해제 승인 고시

○ 2022. 03. : 경기주택도시공사 공동시행 기본협약 변경 체결 (GH 70%)

○ 2022. 06. : 보상공고 (~2022.07.15.)

○ 2022. 12. : 손실보상협의 개시

○ 2023. 01. : 산업단지 관리기본계획 승인 (경기도 고시 제2023-3호)

○ 2023. 02. : 공사 착공

○ 2023. 06. : 산단계획 변경 승인 고시(경기도 고시 제2023-158호)

○ 2023. 09. : 기공식 (9/20)

○ 2023. 10. : 산업단지 변경승인 고시(경기도 고시 제2023-274호)

○ 2023. 12. : 보상금 공탁 및 수용개시(12/28) / 문화재용역 재착수

○ 2024. 01. : 분묘개장 개시 / 공공청사(소방서) 분양 계약

○ 2024. 12. : 산업(물류)시설용지 분양 계약

○ 2025. 03. : 산단계획 변경 승인 고시(경기도 고시 제2025-125호)

○ 2025. 06. : 관리기본계획 변경 승인 고시(경기도 고시 제2025-231호)

○ 2025. 下. : 기반시설(진입도로, 공업용수, 생활용수) 완료

○ 2026. 下. : 기반시설(폐수연계처리) 완료

○ 2027. 下. : 공사 준공 및 정산

▣ 사업효과

○ 고부가가치 무공해산업 기업 유치로 경쟁력 있는 도시성장 기반 마련

○ 양질의 일자리 창출을 통한 경기북부 및 양주시 동서균형발전의 가시적 성과 달성

▣ 관련사진

▣ 담당부서 : 기업지원과 산단조성관리팀 지유민 (☏ 031-8082-6023)

양주시 장애인형 국민체육센터 건립

장애인의 재활 및 건강증진을 통하여 생활체육 복지서비스 사각지대   해소 및 삶의 질 향상

▣ 사업개요

○ 위치 : 삼숭동 640-14번지 일원(삼숭2지구 내)

○ 규모 : 지하1층/지상3층 부지면적 5,932㎡, 연면적 3,000㎡

○ 기간 : 2021. 1. ~ 2026. 1.

○ 내용 : 수중운동실, 부대시설, 체력단련장, 다목적체육관 등

○ 사업비 : 17,000백만원

사업비 (백만원)	재원별	총사업비	기투자	2024 예산액	향후소요
	합계	17,000	8,800	2,700	5,500
	국비	4,000	4,000	-	-
	도비	-	-	-	-
	특교세	-	-	-	-
	특조금	3,000	3,000	-	-
	시비	10,000	1,800	2,700	5,500

▣ 추진상황 및 향후계획

○ 2020. 01. : 장애인형 국민체육센터 건립 계획 수립

○ 2020. 09. : 21년 국민체육센터(장애인형) 공모사업 선정(문화체육관광부, 4,000백만원)

○ 2020. 10. : 새로운경기 정책공모 2020, 경기First 장려상 수상 (경기도, 3,000백만원)

○ 2023. 02. : 실시설계 준공

○ 2023. 06. : 경기도 기술심의 등 사전절차 완료

○ 2024. 06. : 공사 착공(현재공정률 56%)

○ 2026. 01. : 공사 준공

▣ 사업효과

○ 장애인의 재활 및 건강증진을 통하여 생활체육 활성화

▣ 관련사진

▣ 담당부서 : 청년체육과 체육시설팀 신동주 (☏ 031-8082-5636)

시도30호선(방성-산북간) 도로확포장공사

시도30호선“방성리 ~ 산북동” 구간 도로확포장을 통한 교통량 분산 및 동서 균형발전 도모

▣ 사업개요

○ 기간 : 2015. 1. ~ 2026. 6.

○ 위치 : 백석읍 방성리(광백저수지) ~ 산북동(국도3호선)

○ 규모 : 도로확포장 L=3.25km, W=10m, 교랑 3개소

○ 사업비 : 43,640백만원

사업비 (백만원)	재원별	총사업비	기투자	2024 예산액	향후소요
	합계	43,640	30,200	3,940	9,500
	국비	-	-	-	-
	도비	1,200	1,200	-	-
	특교세	-	-	-	-
	특조금	4,600	3,400	-	1,200
	시비	37,840	25,600	3,940	8,300

▣ 추진상황 및 향후계획

○ 2019. 12. : 공사 착공

○ 2024. 10. : 2구간 개통 완료

○ 2025. 06. : 전체 공정률 75%

○ 2026. 06. : 공사 준공

▣ 사업효과

○ 양주시 동서 간 접근성 향상으로 주민 이동 편의 및 교통 흐름 개선

○ 만성적인 교통정체 해소를 통한 통행시간 단축 및 교통안전성 강화

▣ 관련사진

▣ 담당부서 : 건설과 도로건설팀 임선호 (☏ 031-8082-5936)

선암리 도시계획도로(중로2-4호선) 확장공사

도로 개설 및 확장으로 주변지역의 장래 교통량 해소 및 도로 이용객 편의 제공

▣ 사업개요

○ 기간 : 2019. ~ 2025.

○ 위치 : 은현면 선암리 478-2번지 일원(선암1리 마을회관)

○ 규모 : 도시계획도로(중로2-4호선) 개설 L=560m, B=15m

○ 사업비 : 7,500백만원

사업비 (백만원)	재원별	총사업비	기투자	2024 예산액	향후소요
	합계	7,500	3,300	1,200	3,000
	국비	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-
	특교세	700	-	700	-
	특조금	-	-	-	-
	시비	6,800	3,300	500	3,000

▣ 추진상황 및 향후계획

○ 2025. 07. : 보상협의 및 공사 추진(토지보상률 90%, 공정율 33%)

▣ 사업효과

○ 지역 간 연계도로 구축으로 균형적인 도시발전 도모

▣ 관련사진

L=560m B=15m

선암1리

마을회관

은현면

행정복지센터

선암리

지방도

375호선

▣ 담당부서 : 건설과 건설팀 고윤희 (☏ 031-8082-5939)

회천 도시계획도로(소로3-동2호선 외 2) 개설사업

덕정동 서희1차아파트 인근 도시계획도로 개설에 따른 주민 숙원사업 및 주민불편을 해소하고 도로교통망 확충으로 균형적인 도시발전 도모

▣ 사업개요

○ 기간 : 2009. ~ 2026.

○ 위치 : 덕정동 365-88 ~덕정동 118-13번지

○ 규모 : 도시계획도로 개설 L=422m, B=6m

○ 사업비 : 5,250백만원

사업비 (백만원)	재원별	총사업비	기투자	2024 예산액	향후소요
	합계	5,250	2,902	648	1,700
	국비	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-
	시비	5,250	2,902	648	1,700

▣ 추진상황 및 향후계획

○ 2009. 04. : 실시설계용역 준공

○ 2010. 08. : 도시관리계획 실시계획 인가

○ 2020. 06. : 실시계획인가 고시

○ 2020. 09. : 보상계획 공고

○ 2025. 06. : 보상협의 완료 (보상률 100%)

○ 2025. 04. : 공사 착공 (현재 공정률(2025. 7. 기준) 10%)

▣ 사업효과

○ 지역간 연계도로 구축으로 균형적인 도시발전 도모

▣ 관련사진

L=225m B=6m

L=197m B=6m

L=422m B=6m

서희 아파트

소로3-동2호외1

소로3-동39,동157

1호선

(경원선

기곡사거리

▣ 담당부서 : 건설과 도시도로팀 이민재 (☏ 031-8082-6712)

양주시 생활자원회수센터 설치사업

생활자원회수센터 현대화 사업을 통한 근로자 작업환경 및 공정 개선을 통한 안전사고 예방 및 자원순환율 제고

▣ 사업개요

○ 기간 : 2019. 4. ~ 2025. 12.

○ 위치 : 은현면 하패리 1026-12번지 일원

○ 규모 : 혼합재활용선별시설 50톤/일

○ 사업비 : 226억원

사업비 (백만원)	재원별	총사업비	기투자	2024 예산액	향후소요
	합계	22,679	9,828	7,097	5,754
	국비	4,872	1,775	2,290	807
	도비	3,294	1,126	1,603	565
	특교세	-	-	-	-
	특조금	2,500	-	-	2,500
	시비	12,013	6,927	3,204	1,882

▣ 추진상황 및 향후계획

○ 2019. 04. : 타당성 조사 및 기본계획용역 착수

○ 2021. 02. : 토지보상 및 취득

○ 2022. 12. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 승인

○ 2023. 08. : 실시계획인가 승인

○ 2023. 09. : 생활자원회수센터 설치사업 총사업비 조정 승인 (환경부)

○ 2023. 11. : 기본 및 실시설계 용역 준공

○ 2024. 02. : 건설공사 착공

○ 2024. 05. : 건설사업관리용역 착수

○ 2025. 02. : 건설공사 2차분 착공

○ 2025. 12. : 공사 준공 예정 (시운전 1개월 포함)

▣ 관련사진

▣ 담당부서 : 청소행정과 자원시설팀 배기식 (☏ 031-8082-6931)

경기 꿈틀 생활 SOC 복합화사업

덕정 구도심 내 행정·문화·체육 등을 융합한 생활 SOC 복합화시설을

건립하여 지역 주민 삶의 질을 향상시키고자 함

▣ 사업개요

○ 위치 : 덕정동 140-1번지 일원[(구)회천1동 행정복지센터]

○ 규모 : 지하 2층~지상 8층(부지면적: 2,761㎡, 건축연면적: 10,013.36㎡)

○ 기간 : 2023. 1. 25. ~ 2025. 12. 19.

○ 사업비 : 35,700백만원

사업비 (백만원)	재원별	총사업비	기투자	2024 예산액	향후소요
	합계	35,700	20,440	5,412	9,848
	국비	6,624	6,624	-	-
	도비	592	592	-	-
	특교세	400	-	400	-
	특조금	6,000	3,600	-	2,400
	시비	22,084	9,624	5,012	7,448

▣ 추진상황 및 향후계획

○ 2019. 11. : 건축기본계획 수립용역 착수

○ 2020. 09. : SOC복합화사업 선정

○ 2021. 09. : 기본 및 실시설계 착수

○ 2022. 07. : 경기꿈틀 생활SOC복합화 사업 경기도 건설기술 심의회 개최

○ 2022. 10. : 구)회천1동 행정복지센터 해체 공사 완료

○ 2022. 12. : 기본 및 실시설계 준공

○ 2023. 01. : 경기꿈틀 생활SOC복합화 사업 공사 착공

○ 2025. 12. : 경기꿈틀 생활SOC복합화 사업 공사 준공

▣ 사업효과

○ 일상생활과 밀접한 다양한 시설 건립을 통한 주민 삶의 질 향상 및 지역 경제 활성화, 지역 균형 발전 기여

▣ 관련사진

조감도
현장사진 1(정면)	현장사진 2(배면)

▣ 담당부서 : 도시재생과 도시재생사업팀 남궁민 (☏ 031-8082-5973)